구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 교통정책담당 (담당자 송병율, 6833)
	1-1
추진실적	60% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

읍·면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2026년

❍ 위       치: 산청군 내 읍·면 소재지 일원

❍ 총 소요예산: 7,433백만원(국 1,741, 도 1,500, 군 4,192)

❍ 사 업 내 용: 주차장 수급이 부족한 지역에 공영주차장 설치

□ 주요 추진사항(산청시장 주변 공영주차장 기준)

❍ 2020 산청군 주차장 수급 실태 조사 용역	: 2020.  6월

❍ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 심의	: 2021.  1. ~  2월

❍ 조성지 매입을 위한 협의 및 토지매수	: 2022.  1. ~ 10월

❍ 지장물 철거 및 공사 사전준비	: 2022. 11. ~ 2023. 6월

❍ 산청시장 주변 공영주차장 조성 사업 시행	: 2023.  9. ~ 현재

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,433	7,433	7,433	8,668	1,741	1,000	5,927	-	8,668	1,741	1,000	5,927	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	7,433	-	4,433	-	1,000	1,000	1,000	-
국비	1,741	-	1,741	-	-	-	-	-
도비	1,500	-	-	-	500	500	500	-
군비	4,192	-	2,692	-	500	500	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
읍·면 소재지권 주차난 해소 (주차장 확보)	합계	8,668	3,898	4,433	3,725	335	173	3,900	-
	국비	1,741	1,471	1,741	1,471	-	-	-	-
	도비	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-
	군비	5,927	2,427	2,692	2,254	335	173	2,900	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 주차장 소요가 발생하는 주요 소재지의 경우 대상지 선정과 높은 사업비 등의 문제가 예상됨

❍ 주차장 수급실태조사(2024년 용역시행) 결과와 군민건의 등을 복합적으로
고려하여 사업대상지 선정

❍ 주차환경개선 지원사업 등 전환사업 신청을 통해 재정 부담 완화

□ 향후 추진계획

❍ 산청시장 주변 공영주차장 조성사업 준공	: 2024. 4월

❍ 산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업 추진	: 2024. 1. ~ 12월

❍ 단성 성내마을 주차장 조성사업 추진	: 2024. 1. ~ 12월

❍ 신안면사무소 주변 공영주차장 조성사업 추진	: 2024. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	경제교통과 교통정책담당 (담당자 고건수)
	1-1
추진실적	30% (정상추진)		완료예상	장기추진
			목표달성여부	여

읍·면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

□ 사업개요

❍ 단기사업(산청시장 주변 공영주차장 조성사업)

- 위    치 : 산청읍 산청리 237외 6필지

- 소요예산 : 7,433백만원(균특 1,741, 도1,500 군4,192)

- 사업내용 : 공영주차장 조성 1식(A=2,714㎡)

❍ 장기사업(읍·면 소재지권 주차장 확보)

- 정부 및 도의 각종 지원사업 공모 신청 등을 통한 예산확보로 읍·면 소재지권 주차장 확충 추진

- 타 부서와 협조체계 구축 및 공공사업 추진과 연계하여 주차장 확충 추진

(예 : 건설과의 마을별 다목적광장 조성사업)

□ 추진사항(산청시장 주변 공영주차장 조성사업)

❍ 2020 산청군 주차장 수급실태조사용역                 : 2020. 6월

❍ 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 심의          : 2021. 1. ~ 2월

❍ 조성지 매입을 위한 협의(1차 ~ 16차 이상)             : 2022. 1. ~ 10월

❍ 주차장 조성을 위한 지장물 철거공사 등 사전조치 시행    : 2022. 11. ~ 현재

□ 연차별 사업예산(산청시장 주변 공영주차장 조성사업)

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	4,433	4,433	469	1,000	1,000	1,000
국비	1,741	1,741
도비	1,500			500	500	500
군비	4,192	2,223	469	500	500	500
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 장기사업 : 읍·면 소재지권 주차장 조성에 따른 대상지 선정 및 많은 사업비 투입 등이 예상 됨

⇒ 정부 및 도의 각종 공모사업 신청, 타 부서와의 협조체계를 통한 예산 확보 매진

□ 향후 추진계획

❍ 정부 및 도의 각종 공모사업 신청 및 타 부서와의 협조체계를 통한 예산 확보 매진