구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 권영빈, 7334)
	1-10
추진실적	50% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

농산어촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2020. 1. ~ 2024. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 소재지 내

❍ 총 소요예산: 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사 업 내 용

- 어울림문화센터 조성(2,268㎡), 청소년 문화의집 조성(966㎡)

- 보행 및 교통환경 개선 1식, 어울림마당 조성(845㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 시행계획 및 세부설계 착수                               : 2022.  7월

❍ 시행계획 및 세부설계 완료                               : 2023.  9월

❍ 공사 착공                                               : 2023. 10월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
16,000	16,000	12,579	16,000	11,200	1,440	3,360	-	12,579	8,805	1,132	2,642	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	16,000	3,421	3,007	4,312	5,260	-	-	-
국비	11,200	2,395	2,105	3,018	3,682	-	-	-
도비	1,440	308	270	388	474	-	-	-
군비	3,360	718	632	906	1,104	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
농산어촌 주거플랫폼 사업	소계	12,579	7,318	3,007	3,007	4,311	4,311	5,261	-
	국비	8,805	5,123	2,105	2,105	3,018	3,018	3,682	-
	도비	1,132	658	270	270	388	388	474	-
	군비	2,642	1,537	632	632	905	905	1,105	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공                                               : 2024.  12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	지역발전과 농촌개발담당 (담당자 김영옥)
	1-10
추진실적	20% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

농산촌 주거플랫폼 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12월

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소재지 일원

❍ 소요예산 : 16,000백만원(국비 11,200, 도비 1,440, 군비 3,360)

❍ 사업내용 : 어울림문화센터 조성, 문화의 집 리모델링, 어울림마당 조성 등

□ 추진사항

❍ 공모사업 선정                                           : 2019. 12월

❍ 기본계획 수립 착수                                      : 2020.  5월

❍ 기본계획 수립 완료                                      : 2022.  2월

❍ 시행계획(세부설계) 수립 착수                             : 2022.  7월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	16,000	6,428	4,312	5,260
국비	11,200	4,500	3,018	3,682
도비	1,440	578	388	474
군비	3,360	1,350	906	1,104
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 정상추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 시행계획(세부설계) 수립 완료                             : 2023.  2월

❍ 공사 착공                                               : 2023.  6월

❍ 공사 준공                                               : 2024. 12월