구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 서승현, 6433)
	3-4
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 7. ~ 2024. 12월

- 변    경: 2022. 7. ~ 2026. 12월

- 변경사유: 사전 행정절차 진행 및 편입부지 보상 협의 지연으로 변경

❍ 위       치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 총 소요예산: 8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

* 예산확보방안: 지방전환 사업신청(도비) 및 자체예산 확보

❍ 사 업 내 용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 주요 추진사항

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초 중·고교 활용방안 수립 용역 시행	: 2023. 5월

- 공유재산 관리계획 승인	: 2023. 5월

❍ 단성면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 5월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업 준공(1차분)	: 2023. 6월

❍ 오부면 파크골프장 조성사업 준공	: 2023. 6월

❍ 신등면 파크골프장 조성사업 준공                            : 2023.12월

❍ 산청읍 파크골프장 조성사업(잔여분) 조사측량 및 실시설계용역	: 2024. 1월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
8,280	8,280	8,280	5,000	400	200	4,400	-	5,000	400	200	4,400	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	8,280	-	580	4,700	3,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,160	-	-	960	1,200	-	-	-
군비	6,120	-	580	3,740	1,800	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
공공체육시설 확충	합계	5,000	1,216	500	435	1,100	781	3,400	-
	국비	400	-	-	-	-	-	400	-
	도비	200	46	-	-	200	46	-	-
	군비	4,400	1,170	500	435	900	735	3,000	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ (생초면 공공파크골프장) 하천기본계획 변경 등 행정절차 지연

→ 하천관리청과 유기적 협의로 행정절차 조기 이행

□ 향후 추진계획

❍ 산청읍 파크골프장 조성

- 공사 착공 및 준공(잔여분)	: 2024. 3. ~ 5월

❍ 생초면 공공파크골프장 조성

- 남강하천기본계획(변경)고시	: 2024. 6월

- 2025년 지방전환사업 예산 신청	: 2024. 8월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 1. ~ 12월

❍ 생초 축구센터 건립사업

- 공공용 건물 설계공모 실시	: 2024. 6. ~ 10월

- 생초중학교 매입	: 2024. 7월

- 기본계획 및 실시설계	: 2024. 10. ~ 2025. 2월

- 생초중학교 철거	: 2024. 11월

- 공사 착공 및 준공	: 2025. 5. ~ 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 김진구)
	3-4
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

공공체육시설 확충

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 7. ~ 2024. 12월

❍ 위    치: 관내 일원(산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 등)

❍ 소요예산: 8,280백만원(도비 2,160, 군비 6,120)

❍ 사업내용

- 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 산청읍, 오부면, 생초면, 단성면 파크골프장 조성 등

□ 추진사항

❍ 산청군 공공파크골프장 조성

- 실시설계용역 및 소규모환경영향평가용역 시행   : 2022. 8. ~ 2023. 6월

❍ 오부면 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                  : 2022. 6. ~ 12월

❍ 단성면 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                  : 2022. 2. ~  6월

- 공사(조경공사) 착공 및 준공                    : 2022. 5. ~ 11월

- 공사(토목공사) 착공                            : 2022. 10. ~ 2023. 3월

□ 연차별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	8,280	580	4,700	3,000
국비
도비	2,160		960	1,200
군비	6,120	580	3,740	1,800
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 최소 6,000㎡ 이상의 토지가 확보되어야 9홀 파크골프장 조성이 가능하나, 현재 군유지에 설치 가능한 곳이 많지 않음

⇒ 기존 체육시설 및 하천변 공원 등을 활용한 대체 조성 검토

❍ 생초중학교 매입비용 약20억원, 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성비용 약 30억원 등 총50억원의 예산이 필요

⇒ 매입비용은 자체예산으로 확보하고, 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성비

용은 지방전환사업 등 국·도비 보조 사업 신청으로 예산 확보

□ 향후 추진계획

❍ 생초면 전지훈련 지원센터 및 축구장 조성

- 생초중고 활용방안 수립 용역                     : 2023. 2. ~ 6월

- 생초중학교 매입                                 : 2024. 3월

- 기본계획 및 실시설계용역                        : 2024. 5. ~ 6월

- 공사착공 및 준공                                : 2024. 7. ~ 12월

❍ 산청군 공공파크골프장 조성

- 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 협의         : 2023. 12. ~ 2024. 3월

- 공사 착공 및 준공                               : 2024. 3. ~  12월

❍ 산청읍 파크골프장 조성

- 실시설계용역                                    : 2023. 1. ~  5월

- 공사 착공 및 준공                               : 2023. 6. ~ 11월

❍ 오부면 파크골프장 조성

- 공사 착공 및 준공                               : 2023. 3. ~  6월