구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 개발담당 (담당자 김유준, 7211)
	4-3
추진실적	10 % (정상추진)		완료예상	2025년 12월
			목표달성여부	여

대원사 계곡길 연장

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023 ~ 2025년

❍ 위    치: 산청군 삼장면 유평리 일원

❍ 소요예산: 3,000백만원(도비(균특) 1,500 도 450 군 1,050)

❍ 사업내용: 생태탐방로 조성 L=1.5km(데크로드, 전망대, 휴게쉼터 등)

□ 주요 추진사항

❍ 관광자원개발사업 예산 신청 및 건의                  : 2022. 7. ~ 10월

❍ 관광자원개발사업 예산 확정                          : 2023. 1월

❍ 실시설계용역 시행                             : 2023. 4월 ~ 2024. 4월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
3,000	3,000	3,000	1,100	-	650	450	-	1,100	-	650	450	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,950	-	-	650	650	650	-	-
군비	1,050	-	-	350	350	350	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
대원사 계곡길 연장	소계	1,100	-	-	-	300	-	800	-
	국비	-	-	-	-	-	-		-
	도비	650	-	-	-	195	-	455	-
	군비	450	-	-	-	105	-	345	-
	기타	-	-	-	-	-	-		-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 국립공원 탐방로 입지적정성 평가                 : 2024.  1. ~ 6월

❍ 토지보상 협의                                   : 2024.  1. ~ 6월

❍ 2025년 관광자원개발사업 예산 확보               : 2024.  9. ~ 12월

❍ 사업착수 및 준공                                : 2024. 6. ~ 2025. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 조현형)
	4-3
추진실적	0% (정상추진)		완료예상	2025년
			목표달성여부	여

대원사 계곡길 연장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2025년

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 유평리 일원

❍ 소요예산 : 3,000백만원(도비(균특) 1,500 도 450 군 1,050)

❍ 사업내용 : 생태탐방로 조성 L=1.5km(데크로드, 전망대, 휴게쉼터 등)

□ 추진사항

❍　관광자원개발사업(균특전환) 건의                         : 2022. 7월

❍　관광자원개발사업(균특전환) 예산 확정(실시설계용역비)      : 2023. 1월

❍　관광자원개발사업(균특전환) 보조금 교부 신청(실시설계용역비)    : 2023. 1월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	3,000		300	1,000	1,700
국비
도비	1,950		195	650	1,105
군비	1,050		105	350	595
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 지역이 국립공원구역으로 탐방노선에 대한 행정절차 선행 필요

☞ 대책: 국립공원 구역 탐방로 입지적정성평가 신청을 통한 노선협의

□ 향후 추진계획

❍ 지리산 국립공원 협의 및 탐방로 입지적정성평가 : 2023. 1. ~ 6월

❍ 실시설계 및 인허가 협의                       : 2023. 7. ~ 12월

❍ 사업착수 및 준공                              : 2024. 1. ~ 2025. 12월