구 분	관리번호	공약사업	담당부서	환경위생과 환경보전담당 (담당자 임임순, 970-7101)
	4-10
추진실적	60% (정상추진 )		완료예상	2024년 4월
			목표달성여부	여

생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 1. ~ 12월

- 변경: 2023. 11월 ~ 2024. 4월

- 변경사유:「생초지구 풍수해생활권 종합정비사업」으로 인한 장소 변경 검토

❍ 위       치: 산청군 생초면 어서리 287-2일대

❍ 총 소요예산: 금100백만원(군비)

❍ 사 업 내 용: 민물고기 먹거리타운 홍보 전광판 설치(생초버스터미널 인근)

□ 주요 추진사항

❍ 홍보 전광판 디자인 및 설치 위치 선정       : 2023. 11월

❍ 홍보 전광판 설치사업 계약                  : 2023. 11월

❍ 문화재(생초고분군) 보존 영향 검토 신청      : 2023. 12월

❍ 홍보 전광판 설치사업 추진                  : 2023. 12월 ~ 2024. 4월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
100	100	100	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	100	-	-	100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	100	-	-	100	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
생초 민물 먹거리타운 명품화 사업 지원	소계	100	-	-	-	100	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	100	-	-	-	100	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 동절기 및 문화재 심의 일정 등으로 공사 중단

❍ 동절기 해제 후 사업 재개

□ 향후 추진계획

❍ 공작물 축조 신고 및 옥외광고물 신고            : 2024. 2월

❍ 홍보 전광판 제작 및 설치                       : 2024. 3월

❍ 홍보 전광판 운영                               : 2024. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	환경위생과 환경보전 (담당자 정세원)
	4-10
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2023년
			목표달성여부	여

민물고기 먹거리타운 명품화 지원사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023년

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 259-12일대

❍ 소요예산 : 100백만원(군비)

❍ 사업내용 : 생초시장 입구 민물고기 먹거리타운 아치형 간판 설치

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	100		100
국비
도비
군비	100		100
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 간판 디자인 선정                                      : 2023. 3월

❍ 간판 제작 및 설치(설치장소 주민의견 수렴)              : 2023. 4. ~ 6월