구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 장애인복지담당 (담당자 김난진, 6852)
	3-6
추진실적	30% (정상추진)		완료예상	2025년
			목표달성여부	여

산청군 장애인회관 신축(변경)

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2021년 ~ 2025년

❍ 위       치: 경남 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 총 소요예산: 7,900백만원(특별교부세 2,000 도비 2,700 군비 3,200)

❍ 사 업 내 용: 장애인회관 1동 신축(2층 규모, 연면적 1,865.91㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 완료                 : 2023. 1월

❍ 공사착공 및 중단                               : 2023. 5월 / 2023. 8월

❍ 지반안정성 검토 용역                           : 2023. 11월

❍ 경상남도 지방재정투자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 : 2024. 2월

❍ 공사 중단 해제 및 추경 예산 반영               : 2024. 4월 / 2024. 5월

❍ 경상남도 계약변경 심사                         : 2024. 6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,000	7,900	7,580	7,900	2,000	2,700	3,200	-	6,680	2,000	2,540	3,040	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액			임기 내 투자 계획			임기 후
		21년 까지	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	7,900	320	-	6,680	900	-	-	-
국비	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-
도비	3,250	160	-	2,540	-	-	-	-
군비	2,650	160	-	2,140	900	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군 장애인회관 건립	합계	7,580	2,353	-	270	6,680	1,160	900	923
	국비	2,000	1,160	-	-	2,000	1,015	-	145
	도비	2,540	584	-	135	2,540	82	-	367
	군비	3,040	609	-	135	2,140	63	900	411
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공   : 2025. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 장애인복지담당 (담당자 김난진, 6852)
	3-6
추진실적	30% (정상추진)		완료예상	2025년 4월
			목표달성여부	여

산청군 장애인회관 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2021년 ~ 2024년

- 변    경: 2021년 ~ 2025년(4년간)

- 변경사유: 지반보강공사로 공사기간 연장

❍ 위       치: 경남 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 총 소요예산: 7,000백만원(특별교부세 2,000 도 3,250 군비 1,750)

- 변    경: 7,900백만원(특별교부세 2,000 도 2,700 군비 3,200)

- 변경사유: 지반보강사업비 추가 확보

❍ 사 업 내 용: 산청군 장애인회관 1동 신축(2층 규모, 연면적 1,865.91㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 완료                 : 2023. 1월

❍ 공사착공 및 중단                               : 2023. 5월 / 2023. 8월

❍ 지반안정성 검토 용역                           : 2023. 11월

❍ 경상남도 지방재정투자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 : 2024. 2월

❍ 공사 중단 해제 및 추경 예산 반영               : 2024. 4월 / 2024. 5월

❍ 경상남도 계약변경 심사                         : 2024. 6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,000	7,000	6,680	7,900	2,000	2,700	3,200	-	7,580	2,000	2,540	3,040	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	7,000	320	3,500	3,180	-	-	-	-
국비	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
도비	3,250	160	1,500	1,590	-	-	-	-
군비	1,750	160	-	1,590	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군장애인회관 신축	합계	7,580	1,684	-	270	6,680	1,160	900	254
	국비	2,000	1,059	-	-	2,000	1,015	-	44
	도비	2,540	331	-	135	2,540	82	-	114
	군비	3,040	294	-	135	2,140	63	900	96
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후 추진계획

❍ 공사 준공   : 2025. 4월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	행복나눔과 장애인복지담당 (담당자 김난진, 6852)
	3-6
추진실적	30% (정상추진)		완료예상	2025년 5월
			목표달성여부	여

산청군 장애인회관 신축

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2021년 ~ 2024년

- 변경: 2021년 ~ 2025년(4년간)

- 변경사유: 지반안정성 문제로 공사중단 및 지반보강으로 공사기간 연장

❍ 위       치: 경남 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 총 소요예산: 7,000백만원(특별교부세 2,000 도 3,250 군비 1,750)

❍ 사 업 내 용: 산청군 장애인회관 1동 신축(2층 규모, 연면적 1,865.91㎡)

□ 주요 추진사항

❍ 기본계획 및 실시설계 용역 완료                 : 2023. 1월

❍ 공사착공 및 중단                               : 2023. 5월 / 2023. 8월

❍ 지반안정성 검토 용역                           : 2023. 11월

❍ 경상남도 지방재정투자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경(진행중) : 2023. 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
7,000	7,000	6,680	7,000	2,000	2,700	2,300	-	6,680	2,000	2,540	2,140	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	7,000	320	3,500	3,180	-	-	-	-
국비	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
도비	3,250	160	1,500	1,590	-	-	-	-
군비	1,750	160	-	1,590	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
산청군장애인회관 신축	소계	6,680	1,430	-	270	6,680	1,160	-	-
	국비	2,000	1,015	-	-	2,000	1,015	-	-
	도비	2,540	217	-	135	2,540	82	-	-
	군비	2,140	198	-	135	2,140	63	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지반 안정성 문제로 공사 중단 및 지반 보강을 위한 사업비 9억 증액 필요

⇒ 예산 추가 확보 및 사업비 증액을 위한 행정절차 진행 중

(경남도 지방재정투자 재심사, 공유재산 관리계획 변경, 의회 행정간담회)

❍ 공사기간 연장 불가피: (당초) 2024. 2월 준공 (변경) 2025. 5월 준공

□ 향후 추진계획

❍ 경상남도 계약 심사(변경)                      : 2024. 3월

❍ 추경예산(군비) 확보 및 공사 재개              : 2024. 5월

❍ 공사 준공                                    : 2025. 5월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	복지지원과 장애인복지담당 (담당자 홍인경)
	3-6
추진실적	5% (정상추진)		완료예상	2024년 3월
			목표달성여부	여

산청군 장애인회관 신축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 산11-1 일원

❍ 소요예산 : 7,000백만원(특별교부세2,000 특별조정교부금1,500 도1,200 군2,300)

❍ 사업내용 : 산청군 장애인회관 1동 신축(2층규모, 연면적1,822.49㎡)

□ 추진사항

❍ 지방재정투자심의                              : 2020. 11. 10.

❍ 공유재산 관리계획 승인                        : 2020. 11. 16.

❍ 공공건축 사업계획 사전검토                    : 2020. 12 .23.

❍ 산청군 공공건축심의위원회 심의                : 2021. 7. 2.

❍ 기본계획 및 실시설계 용역                     : 2022. 3. 21. ~ 12. 28.

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	7,000	320	6,680
국비	2,000		2,000
도비	2,700	160	2,540
군비	2,300	160	2,140
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 경상남도 3단계 균형발전사업 결정예정         : 2023년 상반기

❍ 계약심사                                     : 2023. 2월

❍ 공사착공                                     : 2023. 3월

❍ 공사준공                                     : 2024. 2월