구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광시설담당 (담당자 송병기, 7221)
	4-8
추진실적	100% (이행 후 계속추진)		완료	2023년 12월
			목표달성여부	여

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2024년

❍ 위       치: 산청군 생초면 어서리 772, 생초국제조각공원 일원

❍ 총 소요예산: 600백만원(군비)

❍ 사 업 내 용: (기존)15,000㎡ ⟹ (확대)21,000㎡

- 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업(6,000㎡)

- 꽃잔디 확대 조성 대상지 토목공사(수로, 조경석쌓기, 흙콘크리트 포장 등)

- 꽃잔디 추가식재(480,000본) 등

□ 주요 추진사항

❍ 문화재 시굴조사 실시	: 2023.  3. ~  6.

❍ 매장문화재 정밀발굴조사 실시	: 2023.  7. ~  9.

❍ 부지추가조성(확대 조성대상지 토목공사)	: 2023. 10. ~ 11.

❍ 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거	: 2023. 10. ~ 12.

❍ 생초국제조각공원 및 둑방길 꽃잔디 식재·보식, 제초작업 및 관리	: 2024.  1. ~  4.

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
600	600	600	970	-	-	970	-	970	-	-	970	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	600	-	-	300	300	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	600	-	-	300	300	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
생초 국제조각공원 꽃잔디 확대 조성	소계	970	821	-	-	620	600	350	221
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	970	821	-	-	620	600	350	221
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 공원 내 기타 시설물 설치 및 보수(로프난간 등 부대시설, 조경수 전정 등)              : 2024. 6. 1. ~ 11. 30.

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광시설담당 (담당자 송병기, 7221)
	4-8
추진실적	100% (이행 후 계속추진)		완료	2023년 12월
			목표달성여부	여

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022 ~ 2024년

❍ 위       치: 산청군 생초면 어서리 772번지 생초국제조각공원 일원

❍ 총 소요예산: 600백만원(군비)

❍ 사 업 내 용: (기존)15,000㎡ → (확대) 21,000㎡

- 꽃잔디 확대 조성대상지 잡목제거 및 정지작업(6,000㎡)

- 꽃잔디 확대 조성 대상지 토목공사(수로, 조경석쌓기, 흙콘크리트 포장 등)

- 꽃잔디 추가식재(480,000본) 등

□ 주요 추진사항

❍ 문화재 시굴조사 실시                        : 2023. 3월 ~ 6월

❍ 매장문화재 정밀발굴조사 실시                : 2023. 7월 ~ 9월

❍ 부지추가조성(확대 조성대상지 토목공사)      : 2023. 10월 ~ 11월

❍ 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거                 : 2023. 10월 ~ 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
600	600	600	970	-	-	970	-	970	-	-	970	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	600	-	-	300	300	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	600	-	-	300	300	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

세 부 사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
생초 국제조각공원 꽃잔디 확대 조성	소계	970	600	-	-	620	600	350	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	970	600	-	-	620	600	350	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 생초국제조각공원 및 둑방길 꽃잔디 식재·보식, 제초작업 및 관리      : 2024. 1. ~   4월

❍ 공원 내 기타 시설물 설치 및 보수(로프난간 등 부대시설, 조경수 전정 등) : 2024. 1. ~  11월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	관광진흥과 관광시설담당 (담당자 김종수)
	4-8
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2024년
			목표달성여부	여

생초국제조각공원 꽃잔디 확대 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 생초국제조각공원 일원

❍ 소요예산 : 600백만원(군비)

❍ 사업내용

- 꽃잔디 확대 조성 대상지 잡목제거 및 정지작업: 8,000㎡

- 꽃잔디 추가 식재: 480,000본

※ 조각공원 주요현황(총면적 25,000㎡)

·꽃잔디 조성 15,000㎡, 조각품 27점, 가야시대 고군분, 산청박물관, 목아전수관 등

□ 추진사항

❍ 꽃잔디 추가 보식 및 잡초제거                       : 2022. 7. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	600		300	300
국비
도비
군비	600		300	300
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 지역은 매장문화재(생초 고분군) 지역으로 벌목 및 굴착시에 문화재       영향검토를 받아야 하고, 인력으로 꽃잔디를 식재함에 따라 사업 추진이        지연될 우려가 있으므로 사전에 인력 및 예산확보 철저

□ 향후 추진계획

❍ 문화재(매장) 설계용역 및 심의                       : 2023. 2월

❍ 꽃잔디 확대 식재(약 4,000㎡)                         : 2023. 6. ~ 12월

※ 미확보 예산 확보방안(계획) : 2024년 본예산 확보 예정