구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 녹지조성담당 (천상운, 6941)
	4-9
추진실적	50% (정상추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

둔철 산림생태인프라 구축사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사 업 내 용: 자생식물원, 슾지생태관찰소, 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스 생태원 조성, 수국꽃길 조성, 수목보식, 와석충 주변 정비사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022. 1 ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

❍ 수국꽃길 조성	및 야생화 동산 조성	: 2023. 4 ~ 5월

❍ 생태숲 내 임도 주변 수목 식재	: 2024.  4월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	169	169	-	24	145	-	169	-	24	145	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	-	100	500	1,500	400	-
전환	1,000	-	-	-	250	750	-	-
도비	300	-	-	-	75	225	-	-
군비	1,200	-	-	100	175	525	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
둔철 산림생태인프라 구축사업	합계	169	129	-	-	129	129	40	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	24	24	-	-	24	24		-
	군비	145	105	-	-	105	105	40	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 우선순위 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 사업비 확보를 위한 경남도 산림휴양과 업무 협의	: 2024.  8월

❍ 둔철생태숲 내 초화류 및 수목 보식	: 2025.  3월 ~ 6월

❍ 와석총 및 주변 정비사업	: 2025.  6월 ~ 12월

❍ 둔철 산림생태인프라 구축사업 완료	: 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 녹지조성담당 (천상운, 6941)
	4-9
추진실적	40% (정상추진)		완료예상	2026년 12월
			목표달성여부	여

둔철 산림생태인프라 구축사업

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2023. 1월 ~ 2026. 12월

❍ 위       치: 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 총 소요예산: 금2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사 업 내 용: 자생식물원, 슾지생태관찰소, 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스 생태원 조성, 수국꽃길 조성, 수목보식, 와석충 주변 정비사업 등

□ 주요 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022. 1 ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

❍ 수국꽃길 조성	: 2023. 4월

❍ 둔철생태숲 내 야생화 동산 조성	: 2023. 5월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
2,500	2,500	169	169	-	24	145	-	169	-	24	145	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,500	-	-	100	500	1,500	400	-
전환	1,000	-	-	-	250	750	-	-
도비	300	-	-	-	75	225	-	-
군비	1,200	-	-	100	175	525	400	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
둔철 산림생태인프라 구축사업	합계	169	129	-	-	129	129	40	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	도비	24	24	-	-	24	24		-
	군비	145	105	-	-	105	105	40	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 우선순위 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 사업비 확보를 위한 경남도 산림휴양과 업무 협의	: 2024.  2월

❍ 둔철생태숲 내 초화류 및 수목 보식	: 2024.  6월

❍ 와석총 및 주변 정비사업	: 2025.  1월 ~ 12월

❍ 둔철 산림생태인프라 구축사업 완료	: 2026. 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	산림녹지과 녹지조성담당 (담당자 천상운)
	4-9
추진실적	10% (정상추진)		완료예상	2026년
			목표달성여부	여

둔철 산림생태인프라 구축사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청군 신안면 안봉리 산19-8번지 일원

❍ 소요예산 : 2,500백만원(전환 1,000, 도비 300, 군비 1,200)

❍ 사업내용

- 생태관찰시설: 자생식물원, 습지생태관찰소 조성 등

- 생태숲보완사업: 둔철천문대 정비 및 확장, 그라스 생태원 조성, 수목보식, 수국꽃길조성 등

□ 추진사항

❍ 사업대상지 현장조사 및 선정	: 2022. 1. ~ 6월

❍ 경상남도 산림휴양과 업무 협의	: 2022. 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	2,500		245	500	1,355	400
전환	1,000		115	250	635
도비	300			75	225
군비	1,200		130	175	495	400
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 지방전환 사업비로 전환사업 신청 시 우선순위 반영 요청

□ 향후 추진계획

❍ 산림생태관찰로, 수목보완식재, 생태관찰소 설치   : 2023. 6월

❍ 지방전환 사업비 확보 건의	: 2023. 7월

❍ 둔철 산림생태인프라 구축사업 시행	: 2024. 1. ~ 2026. 12월