구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 관제통신담당 (담당자 윤광욱, 8932)
	5-3
추진실적	80% (정상추진 )		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

방범용 CCTV 설치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2026. 10.

❍ 위       치: 산청경찰서 및 읍면 민원을 고려해서 선별 설치

❍ 총 소요예산: 1,587백만원(군비)

❍ 사 업 내 용

- 신규 카메라 및 노후 카메라 교체 등 180대 설치

- 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

□ 주요 추진사항

❍ CCTV 교체 7대 및 신규 60대 설치 완료        : 2022. 2. ~ 12월

❍ CCTV 신규 53대 및 교체 14대 설치 완료       : 2023. 2. ~ 12월

❍ CCTV 신규 30대 및 교체 40대 설치중          : 2024. 3. ~  6월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,587	1,587	1,587	1,627	620	48	959	-	1,627	620	48	959	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	1,587	-	42	545	400	300	300	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,587	-	42	545	400	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
방범용 CCTV 설치	합계	1,627	1,046	349	341	580	580	698	125
	국비	620	500	-	-	500	500	120	-
	도비	48	24	-	-	24	24	24	-
	군비	959	522	349	341	56	56	554	125
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024년도 방범용 CCTV 80개소 80대 설치       : 2024. 1. ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 관제통신담당 (담당자 윤광욱, 8932)
	5-3
추진실적	80% (정상추진 )		완료예상	2024년 12월
			목표달성여부	여

방범용 CCTV 설치

□ 사업개요

❍ 사 업 기 간: 2022. 10. ~ 2026. 10.

❍ 위       치: 산청경찰서 및 읍면 민원을 고려해서 선별 설치

❍ 총 소요예산: 1,587백만원(군비)

❍ 사 업 내 용

- 신규 카메라 및 노후 카메라 교체 등 180대 설치

- 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

□ 주요 추진사항

❍ CCTV 교체 7대 및 신규 60대 설치 완료	: 2022. 2 ~ 12월

❍ CCTV 신규 53대, 교체 14대 설치 완료	: 2023. 2 ~ 12월

□ 사업예산 총괄

(금액단위: 백만원)

계획 총계			전체 확보 내역					임기내 확보 내역
최초 계획	현재 계획	임기내 계획총계	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타	확보 총계	국비	도비	군비	민간 기타
1,587	1,587	1,587	1,627	500	168	959	-	1,627	500	168	959	-

□ 임기내 투자계획

(금액단위: 백만원)

재원	총액	기 투자액 (21년 까지)	임기 내 투자 계획					임기 후
			'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	1,587	-	42	545	400	300	300	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,587	-	42	545	400	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행액

(금액단위: 백만원)

사업명	재원	계		2022		2023		2024
		확보액	집행액	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)	확보액	집행액 (이월 포함)
방범용 CCTV 설치	합계	1,627	924	349	344	580	580	698	-
	국비	500	500	-	-	500	500	-	-
	도비	168	24	-	-	24	24	144	-
	군비	959	400	349	344	56	56	554	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2024년도 방범용 CCTV 80개소 80대 설치        : 2024. 1 ~ 12월

구 분	관리번호	공약사업	담당부서	안전총괄과 관제통신담당 (담당자 윤광욱)
	5-3
추진실적	0% (정상추진)		완료예상	2026년
			목표달성여부	여

방범CCTV 설치

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026년

❍ 위    치 : 산청경찰서 및 읍면 민원을 고려해서 선별 설치

❍ 소요예산 : 1,583백만원(군비)

❍ 사업내용

- 신규 카메라 및 노후 카메라 교체 등 180대 설치

- 전용회선 및 자가망을 구성하여 관제센터와 연계

□ 추진사항

❍ CCTV 교체 25대 및 신규 21대 설치 완료            : 2022.  2. ~  6월

❍ 마을 및 차량 방범용 CCTV 5개소 6대 완료          : 2022. 10. ~ 12월

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	임기 내					임기 후	비고
		기 확보예산 ( ~2022년 )	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년이후
계	1,583	38	500	400	300	345
국비
도비
군비	1,583	38	500	400	300	345
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2023년도 방범용 CCTV 55개소 56대 설치        : 2023. 1. ~ 10월